PodrObný popis projektu 

1.	Informace o projektu (podrobněji viz realizační projekt)

1.1	Název projektu
Odstranění materiálů ze sanace lagun Ostramo uložených v lokalitě Vratimov

1.2	Popis realizace projektu
Projekt řeší situaci, která nastala v jižní části areálu bývalých Vratimovských papíren na pozemku parcelní číslo 91/1 v katastrálním území Vratimov, prakticky ve středu města Vratimov, kde se na ploše o velikosti cca 2 500 m2 nachází deponie materiálu vyrobeného z kalů lagun Ostramo a násep tímto materiálem znečištěný. Předmětem projektu je odtěžení, odvoz a odstranění materiálu v odhadovaném množství cca 6 900 tun, který je v současnosti již zařazen jako odpad katalogového čísla 19 03 04* - Odpad hodnocený jako nebezpečný, částečně stabilizovaný.

1.3	Cíle projektu
Cílem projektu je nakládka a odvoz odpadu a vyčištění plochy, na které je odpad uložen a dále konečné odstranění odpadu v souladu se zákonem o odpadech. 

1.4	Soulad projektu s podmínkami Výzvy a Programu
Projekt je podáván do výzvy č. 3/2017 v rámci Národního programu Životní prostředí pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory v prioritní oblasti 3. Odpady, staré zátěže, environmentální rizika, podoblasti 3.3 Odstranění a rekultivace nelegálních skladů odpadů a sanace havarijních stavů, které představují akutní riziko pro životní prostředí, vyhlášené Ministerstvem životní prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky dne 10.03.2017.  

Projekt sleduje stejné cíle jako program. Odstraněním návozu odpadu katalogového čísla 19 03 04 dojde k minimalizaci nepříznivých účinků nakládání s předmětným odpadem na lidské zdraví a životní prostředí. 

Projekt bude prováděn takovým způsobem, aby neohrožoval život, zdraví, zdravé životní podmínky osob pohybujících se v areálu a uživatelů okolních staveb nad limity obsažené ve zvláštních předpisech následkem uvolňování látek nebezpečných pro zdraví a životy osob a zvířat do půdy a vody a ovzduší.

1.5	Harmonogram realizace projektu
Předpokládaný harmonogram prací:

Činnost	Doba trvání - kvalifikovaný odhad	
Veřejná zakázka na výběr dodavatele prací	6 měsíců	
Zpracování prováděcího projektu dodavatele, projednání a schválení	2 měsíce	
Vlastní práce na lokalitě a související činnost (přípravné práce, nakládka, odvoz, úklid, závěrečný monitoring, závěrečná zpráva o provedených pracích, doporučení dalšího postupu	3 měsíce 	
Konečná lhůta pro odstranění odpadu po odvozu na koncovém zařízení 	7 měsíců	
CELKEM	18 měsíců	

2.	Technické informace o projektu (podrobněji viz realizační projekt)
2.1	Struktura a rizikovost odpadů
Na základě doposud provedených prací, rekognoskace terénu a v souladu se závěry dříve realizovaných činností lze konstatovat že:
•	Na povrchu celé manipulační plochy (cca 8.000 m2) byl zjištěn významný výskyt prašnosti (při pomalém příjezdu osobním autem na plochu). Důvodem je vrstva uhloprachu s obsahem jemnozrnných částic uvolněných z deponie. Při suchém a větrném počasí a při pohybu techniky dochází pravděpodobně k významnému riziku expozice zejména u pracovníků, pohybujících se na překladišti.  
•	V této souvislosti je třeba zdůraznit, že nejbližší bytové domy souvislé městské zástavby se nacházejí cca 100 m západně a 140 m východně od deponie.
•	V prostoru překladiště byl zjištěn také výrazný organický zápach, identický s lokalitou lagun Ostramo. Příčinou je bezpochyby uskladněný odpad. 
•	U odpadu na deponii došlo pravděpodobně vlivem dodatečné reaktivity přidaného vápna v kombinaci s povětrnostními podmínkami a srážkami k určité inkrustaci tak, že k jeho rozrušení je v současnosti nutno použít větší stavební mechanizaci.
•	Přestože je těleso dle všech zjištění tvořeno kompaktní hmotou, současně se na jeho povrchu vyskytuje vrstva velmi jemnozrnného odpadu, který kontinuálně podléhá vodní i větrné erozi. Dochází tak zjevně ke stálému uvolňování závadných látek do okolí.  
•	Nelze vyloučit, že ve vnitřním tělese deponie budou pod vrchní krustou uzavřeny více mobilní partie, které nebyly dostatečně stabilizovány v průběhu zavápňování v prostoru lagun.
•	Odpad na deponii byl posuzován z hlediska odpadové legislativy - relevantních vyhlášek Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví, a to na základě provedeného vzorkování deponie Vratimov i zkušeností z odpadových testů a analýz vápenných solidifikátů uložených v prostorách lagun i experimentálně vytvořených v rámci MZ 22 projektu NOLO a následně v rámci projektové přípravy řešení zakázky „nadbilanční kaly“.
•	Dostupné informace analytického charakteru indikují vysokou pravděpodobnost zařazení stabilizátu jako odpadu s nebezpečnými vlastnostmi – dle Nařízení Komise EU č.1357/2014, přílohy III. se ukazují jako relevantní tyto vlastnosti určující nebezpečnost odpadu 
(HP 3 – hořlavé, HP 4 – dráždivé, HP 5 – toxické, HP 7 – karcinogenní, HP 13 – senzibilující, 
HP 14 – ekotoxický).
•	Vzhledem k tomu, že se jedná o odpad s vysokým obsahem ropných látek a proměnlivou vyluhovatelností, která u jiných vzorků solidifikátů překračuje III. třídu vyluhovatelnosti u parametru DOC, i vzhledem k širším souvislostem – požadavek MŽP na užití technologií zajišťující nevratné odstranění nadbilančních kalů z lagun (v podstatě po stabilizaci identických odpadů jako jsou ve Vratimově) je možno jednoznačně považovat za jedinou vhodnou technologii jejich odstranění termický proces – spálení jako odpadu v příslušně vybavené spalovně nebezpečných odpadů nebo jeho energetické využití při spoluspálení ve vhodném zařízení. Pro spoluspálení by však bylo nutno provést technologickou zkoušku, která by vyhodnotila vlivy inkrustace a dalších částečně změněných charakteristik včetně výhřevnosti.
•	Z chemických rozborů zemin, povrchových a podzemních vod v bezprostředním okolí deponie vyplývá, že působením srážek dochází ke splachům z povrchu deponie a vyluhované škodliviny jsou následně infiltrovány do horninového prostředí, tzn. že plocha deponie není odpovídajícím způsobem vodohospodářsky zabezpečená. Zeminy, resp. navážky  pod patou deponie (v bezprostředním kontaktu s jejím tělesem), vykazují v povrchové vrstvě významnější hodnoty ropných uhlovodíků a PAU, v důsledku absorpce kontaminantů při infiltraci povrchových splachů; v hlubších horizontech již tyto hodnoty klesají k přirozenému pozadí.  Ve vzorcích podzemních vod nebyla kontaminace ropnými látkami zjištěna, významně vyšší jsou hodnoty anionaktivních tenzidů.
2.2	Popis technických prací a postup realizace projektu 
Před provedením prací bude proveden vstupní monitoring a označení zájmové plochy. Pak bude stávající deponie postupně odtěžena a zde uložené odpady budou postupně odváženy ke konečnému odstranění. K odtěžení odpadů a jejich nakládce budou využity běžné stavební mechanizmy, především bagry s podkopem. které jsou schopny svým způsobem nakládky zajistit minimální prašnost. Nakonec bude následovat závěrečný monitoring s vyhotovením závěrečné zprávy.

2.3	Posouzení ne/bezpečnosti skladu
Viz kapitola 2.1

2.4	Vzdálenost od významných vodních toků, ekosystémů ZCHÚ
Řešená lokalita je situována v prostoru mezi železniční tratí (nádražím Vratimov) a lokální vodotečí Slezský mlýnský náhon. Neleží v ochranném pásmu vodního zdroje individuálního zásobení ve smyslu Vyhlášky č. 137/1999 Sb a ani není součástí chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV). Lokalita se nenachází v záplavovém území Q100. 

Řešená lokalita ani její bližší okolí nezasahují do zvláště chráněných území stanovených zákonem 114/1992 Sb., ani neleží v jejich vyhlášeném nebo obecně stanoveném pásmu ochrany (např. 50 m od hranic zvláště chráněného území). Na území zájmové lokality se nevyskytují ani žádné památné stromy vyhlášené dle zákona 114/1992 Sb. či připravované k vyhlášení. Nenachází se zde ani registrované významné krajinné prvky nebo přírodní parky.

2.5	Vzdálenost zástavby pro trvalé bydlení a rekreaci
Nejbližší bytové domy souvislé městské zástavby se nacházejí cca 100 m západně a 140 m východně od deponie.

3.	Ekonomické informace o projektu (více viz realizační projekt)
3.1	Položkový rozpočet projektu 
3.2	Výše požadované podpory (v členění dotace / půjčka), výše vlastních zdrojů na realizaci projektu 

4.	Závěrečné shrnutí projektu
Projekt řeší způsob vymístění a odstranění pevných odpadů deponovaných areálu bývalých Vratimovských papíren na pozemku parcelní číslo 91/1 v katastrálním území Vratimov. Realizační projekt, který je samostatnou přílohou žádosti obsahuje také základní informace o lokalitě, historii vzniku deponie, dále řeší problematiku BOZP a PO, řízení prací, monitoring a způsob dokumentace stavu lokality po ukončení akce. V projektu je uveden orientační harmonogram prací (přesný harmonogram musí vypracovat zhotovitel podle svých reálných možností). V realizačním projektu je také předkládán výkaz výměr a navazující položkový rozpočet, který je zařazen jako samostatná příloha, který slouží zadavateli jako informace o  potřebných finančních prostředcích na práce spojené s odstraněním odpadů.

V…………….……. dne………………………….

							…………………………………………..
							za příjemce podpory
							(jméno, příjmení, funkce, razítko, podpis)