Průmyslový park Nový Jičín - II. etapa - rozšíření průmyslové zóny - žádost o prodloužení čerpání dotace

Vážený pane hejtmane,

dovoluji si Vás požádat o prodloužení lhůty realizace projektu „Průmyslový park Nový Jičín – Dolní Předměstí - II. Etapa – rozšíření průmyslové zóny“, na který byla poskytnuta individuální dotace Moravskoslezského kraje (smlouva o poskytnutí dotace ev. č. 00696/2016/RRC). Prodloužení lhůty realizace projektu by následně mělo být upraveno ve smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, případně vyhotoven její dodatek. Současný termín realizace Projektu do 31. 12. 2019, nový termín realizace projektu do 31. 12. 2020, předložení závěrečného vyúčtování by tím mělo být posunuto na 31. 1. 2021.

Důvodem žádosti o prodloužení realizace projektu je časová náročnost prací souvisejících se zpracováním projektové dokumentace na projekt Průmyslový park Nový Jičín – II. Etapa – rozšíření průmyslové zóny. Možnost prodloužení čerpání dotace byla předjednána na schůzi s vedením Moravskoslezského kraje dne 11. 2. 2019. 

Děkuji za kladné vyřízení naší žádosti

S pozdravem 

JUDr. Václav Dobrozemský
místostarosta města

Přílohy
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje 00696/2016/RRC